ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ	
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):	
субъект Российской Федерации	Смоленская область	,	
муниципальное образование	Глинковский муниципальный округ	,	
населенный пункт	С. Глинка	,	
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):	
	67:04:0010141		
	 с. Глинка, ул.Кооперативная		
	(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой		
			
	будут выполняться комплексные кадастровые работы)		
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта	
от	«	16	»	марта		2026	г. №	016/2026		
в период с	«	20	»	марта		2026	г. по «	20	»	ноября		2026	г.	
будут выполняться комплексные кадастровые работы.	
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:	
	Администрация муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области		
Адрес	216320, Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, д.8		
Адрес электронной почты	glinka@admin-smolensk.ru	Номер контактного телефона	8 (48165) 2-15-44		
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):_ООО «ГЕО»__________	
Фамилия, имя, отчество	Лысевич Виталий Викторович		
Адрес	214020,г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф. 315,		
Адрес электронной почты	Smol-geo@mail.ru  	Номер контактного телефона	8 (4812) 31-31-53		
Квалификационный аттестат: № 67-11-0115 от 24 января 2011 г.	
Идентификационный номер	325	дата выдачи	03.04.2012 г.		
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
	
которой является кадастровый инженер 	Ассоциация СРО «ОПКД»		
График выполнения комплексных кадастровых работ 
Время выполнения работ	
Место выполнения работ	
Виды работ	

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта 	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
1. Заказчик обеспечивает информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ.
2. Исполнитель направляет извещение о начале выполнения  комплексных кадастровых работ по адресам и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ (при наличии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости).
3. Исполнитель получает и собирает документы, содержащие необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ, исходные данные.	

в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта 	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ.
4. Исполнитель  подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.	

в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения 	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов недвижимости об  адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.	

не позднее 29.07.2026	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление об учете адресов правообладателей объектов недвижимости.	

не позднее  25.08.2026	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек местоположения границ объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале, в отношении которого проводятся комплексные кадастровые работы.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных участков с отображением образуемых и уточняемых земельных участков.
4. Исполнитель подготавливает проект карты-плана территории.
5. Исполнитель проверяет карту-план территории при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с формированием протокола проверки.	

не позднее 07.09.2026	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
1.	Исполнитель представляет заказчику проект карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе.
2.	Заказчик направляет для рассмотрения проект карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в согласительную комиссию.
3.	Заказчик направляет Исполнителю извещение о проведении заседания согласительной комиссии.	

не позднее 03.10.2026	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя.	

в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии 	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
Принятие в согласительную комиссию возражений относительно местоположения границ земельных участков.	

не позднее 20.11.2026
	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в окончательной редакции и направляет Заказчику (согласительной комиссии) проект карты-плана территории и сопутствующих материалов (работ)	

в течение 20 (двадцати) рабочих дней) со дня истечения срока предоставления возражений 	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые для утверждения проекта карты-плана территории материалы заседания согласительной комиссии.	

не позднее 20.11.2026	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
Утверждение Заказчиком карты-плана территории.	

по 20.11.2026	
Смоленская область, Глинковский муниципальный округ, с. Глинка	
1.	Направление Заказчиком утвержденной карты-плана территории в орган регистрации прав для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.
2.	Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;
3.	Направление Заказчиком уведомления о внесении сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости Исполнителю;
4.	Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
5.	Подписание Заказчиком акта выполненных работ.	

							
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.	
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.	
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:	
	Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8	.	
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.